전라남도지방공무원교육원 신청사 건립사업

- 단계 : 기본계획 -

전라남도지방공무원교육원 임창환 062-606-1321

구 분	내 용	비 고
일반 현황	○ 소 재 지	전라남도 강진군 도암면 만덕리 369번지 일원
○ 인구 수	1,902,260명(2016.11.30.기준)
○ 공무원 수	20,550명/21,094명(2016.11.30.기준)	현원/정원
○ 재정자립도	29.47%
사업 개요	○ 기존청사
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
공무원교육원	1980년	40,099㎡	-	9,409.54㎡	1/3
○ 청사신축 필요성	현 교육원은 교육공간이 협소하고 시설이 노후화 되어, 도민 공감대 형성을 바탕으로 관내로 이전하여 최신 트렌드에 맞는 미래지향적 교육시설 구축
○ 사업기간	2017~2020(4년)
○ 사업수행방식	설계･시공 일괄 : 설계･시공 분리 : ○
○ 추정(예정)가격	-	계약금액	-	낙찰율	- %
○ 청사신축 계획(안)
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
공무원교육원	2020년	81,106㎡	-	15,000㎡	1/3	예정
소요 예산액	○ 사업비 조달 현황(백만원)
구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	46,534		26,534		20,000
당해연도(H)	8,000		8,000
H+1	14,500		4,500		10,000
H+2	13,800		3,800		10,000
H+3 이후	10,234		10,234
○ 총사업비(백만원)
1) 토지매입비	4,800	군유지 및 사유지, 지장물 보상비
2) 설계비	1,588
3) 감리비	2,133
4) 공사비	33,016
5) 기타부대비	4,997	부대비, 예비비, 교육장비 및 집기류 등
향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
공유재산관리계획	‘16. 9.	반영	전라남도의회
투융자심사	‘16. 11.	승인	행정자치부
중기재정계획	‘16. 12.	반영	자체
설계	-		자체
착공	-		자체
준공	-		자체